건축위원회 회의록

□ 일시 : 7월 9일 오후 3시 10분~4시 30분

□ 장소 : 교회 사무실

□ 참석자 : 13명(불참자:이만기,편도선,윤호중)

1) 건축 진행현황 : 조윤익 장로

◦ 성전의자 재료 선택건

- 고무나무 800만, 오우크나무 1,300만중 선택

- 전체의견 : 예산, 실용성 등 고려하여 고무나무로 선택

◦ 사무용가구 선택건

- 일반형 : 1,500만, 다산(학교납품) : 1,900만, 고급형 : 2,500만

- 설치내용 : 지하2층 청년부실 의자 1층 사무실, 3층 목회자실 등

- 전체의견 : 다산 1,900만으로 결정(이태수 집사 추천)

- 전체 예산 3,000만원에서 붙박이장 등도 설치해야함

◦ 도로문제

- 설계대로 진행하고 조합에서 나중에 낮추는 경우 동의해 주는 방식

(구청 해당과 승인여부 확인함)

◦ 옹벽설치 문제 : 다음주 흑석지구대(파출소) 공사시 시행

◦ 3층 싱크대, 강마루 데코타일로 교체(추가 견적),

내부 사인 – 인테리어 비용과 별도, 외부 간판에 포함

◦ 각 방이름 : 위원장 아이디어와 건축위원 의견 수렴하여 이번주중 결정

◦ 공사일정 : 7월말 불가능

- 7/20일까지 마감하도록 요구 : 지체배상금, 손해배상 청구하겠다고 말함

8/10일까지 준공검사 예상(한배선 장로)

- 준공검사전 현장측량 과정이 있어야 하는데 10일이상 소요됨

빨라야 8월말 예상함(김대희 장로)

2) 인테리어 진행상황 : 오인숙 선교사

◦ 벽 : 흰색 페인트, 창 시트지 작업 등

- 계단 십자가 LED, 부부십자가(창호지문)

- 액자 등으로 추가비용 발생(5~6백만원 예상)

3) 기타 토의

◦ 설우와의 추가공사비 9,200만원 – 옹벽 3천만원 포함인가?(최영석 집사)

- 포함임

◦ 추가비용이 계속 발생하고 있는데 세부내역을 정리해야함 : 한배선 장로

- 주방기구, 식탁, 의자, 카페 비품비 등 1,300만원 소요(1,450만원 예산)

◦ 교회 완공시 취득세 문제 : 이성범 집사 확인이 아직까지 안됨

- 비과세 여부 확인하기로 함

◦ 현재 작정금액의 납입현황은?

- 83% 정도, 작정자외 포함시 88% 수준임