건축위원회 회의록

□ 일시 : 8월 13일 오후 3시~4시30분

□ 장소 : 교회 사무실

□ 참석자 : 13명(불참자 : 이만기, 박영근, 박희태, 고상돈), 더 아너스 대표, 장부장,

손석규 장로

1) 인테리어 진행 및 예산사용 내역 : 오인숙 선교사

◦ 최초 예산 : 193백만원

- 추가비용 : 46백만원

◦ 추가비용 보고내용

- 4/23 1층 로비 비용 27백만원

- 7/19 십자가비용, 본당로비, 사인 등 20백만원

- 상세내역 : 본당입구 8백만, 옥상십자가 9십, 180개 십자가 50만,

부부십자가 백만, 1층, 4층 조명 등 9백만

◦ 향후 추가 인테리어 작업

- 식당 : 테이블, 의자

- 카페 : 붙박이 의자, 창가 테이블(290만원 견적)

- 사인작업 : 시트지 등 천만원 예상

- 오인숙 선교사 이후작업 위임 요망(인테리어 비용 지출 문제)

◦ 더 아너스 인테리어 비용 절감내용

- 42백만원 → 4천만원으로 감소, 2,240만원 → 2천만원으로 감소

- 인테리어 잔금 : 57.4백만원 남음

- 더 아너스 대표, 부장과 감사의 인사후 퇴장

◦ 인테리어에 대한 평가(건축위원 일동)

- 오인숙 선교사님의 노력으로 적은 비용으로 높은 효과를 이루었음

- 노력에 감사하며 지출을 많이 했다는 오해로 상처가 없으시길 바람

- 잠시 쉬셨다가 남은 작업 마무리 요청

2) 입당예배 회의결과

◦ 입당예배 준비위원회 회의내용 : 최영석 집사

- 손영삼 집사 주재로 해야할 일 정리

- 9/3부터 예배시작, 9/24 입당예배 예정

- 준비사항에 대해선 준비위원회에 위임함

3) 준공준비 관련 : 조윤익 장로

◦ 서류준비 : 소방, 전기 등 준공과 관련된 서류에 집중

- 정화조 등 추가작업 많음

- 인력수급이 잘 안되고 있음

- 조장로 건축팀장으로 역할을 잘 감당하고 있음 : 김대희 장로

◦ 준공일정 : 26일까지 준공하겠다(설우)고 하나 약속지키기 어려움

- 정화조, 창여시설(성당), 주차장입구 처리 등 아벨에 요청(21일 접수)

- 3일이내 특검(설계사) ⇒ 구청

- 마지막 준공이 쉽지 않음, 미흡한 점이 많음

4) 재정관련 : 최영석 집사

◦ 현재 7억3천 있음

◦ 지출 7억 예상

- 4억4천 + 인테리어 57백만원

- 조명, 기구, 주방, 악기, 중대부중 강당사용료(3천만원), 사인 1천만원 등

◦ 입금 예상액 1억 8천작정(12월말까지)

- 잔금 2억1천에서 대출금 5억5천 : 3억4천 부족예상(4억까지 증액가능)

※ 중대부중 사용관련 : 9월 둘째주까지 예정(행정실장과 대화나눔) : 이태수