건축위원회 회의록

□ 일시 : 4월 23일 오후 3시~5시

□ 장소 : 교회 사무실

□ 참석자 : 12명(불참자 : 박희태, 고상돈, 이만기, 윤호중)

□ 안건

- 인테리어 추진현황 : 오인숙 권사

- 교회 문서, 자산, 홍보전도 계획 : 김재준 집사

- 현재 공정상태 : 조윤익 장로

- 입당준비위원회 추진

- 지구대와 사이에 옹벽 설치 문제

- 재정현황

- 관리집사 선임문제

1) 인테리어 추진현황 : 오인숙 권사

◦ 본당 및 카페 등은 설계대로 추진

◦ 로비 부분 : 추가 설계로 들어감(추가 비용발생, 더 아너스와 협의)

◦ 타일 각 부분 설명

- 1층 바닥 : 다크 그레이

- 벽 : 밝은 회색으로 통일

- 로비 : 예수님의 생애 20개 그림 및 액자(오인숙 선교사 제공)

◦ 카페, 식당은 소그룹 모임으로 활용가능 필요

식당 인테리어

장소별 타일들

2) 교회 감사지적사항 개선계획 : 김재준 집사

- 문서관리, 자산관리, 홍보/전도 관리 방향

3) 현재 공정상태 : 조윤익 장로

◦ 최근 2주정도 미뤄짐(업체 자체 문제)

◦ 현재 공정으론 6월말까지 완공어려움, 7월말까지 예상해야함(김대희 장로)

◦ 원 공정표 별지 배부(조윤익 장로)

◦ 콘크리트 작업은 1주이내 마무리 예정, 4층 식당, 십자가 부분 별도

◦ 입주가 지연됨에 따라 지역아동센터 1개월이상 공간 임대 필요

- 예배당 문제는 중대부중과 협의시 따로 기한 정하지 않았기에 가능할 것으로

판단함(이태수 집사)

- 강당사용 비용 등 협의 문제는 이태수 집사에게 위임하기로함

◦ 기한 위반에 대한 지체상환금 등 설우에게 책임을 요구해야 함(한배선 장로)

◦ 악기 구입건 : 박한별 형제 제안

- 1안 : 그랜드 피아노, 신디 등 42백만원

- 2안 : 일반 피아노, 신디 신규구입 5백만원 등 최소화

- 2안으로 하되 일괄구매 형식으로 가격을 낮추도록, 입찰형식, 지영집사 위임

◦ 식당 기구, 예배당 의자 등 이번주 업체 협상 예정

4) 입당준비위원회 추진

◦ 위원회 구성

- 위원장 : 예배찬양위원장

- 위원 : 각 부서 회장단, 재정부장, 예배부장 등 참여

◦ 시기 : 8월중 수련회이후

- 건축공정표 확인후 추진

- 첫예배후 3주이후 입당예배 추진

5) 지구대와 교회사이 옹벽 설치 문제

◦ 건축허가 관련 옹벽 설치 필요 : 김대희 장로

- 지구대 부담, 반반 부담, 교회에서 부담(비트 17M)

- 교회에서 부담해야 할 것으로 예상

◦ 교회와 도로접근 문제 : 편도선 집사 이번주 방문 및 의견 반영

6) 재정현황 : 최영석 집사

◦ 수입 : 4/22현재 811백만원(78%), 226백만원 잔금

◦ 현재 잔고 12억(대출금 포함)

- 사택잔금 459백만원, 일반재정 3천만원

◦ 지출 : 12억 나가야함

- 추가비용 : 인테리어 2천만원, 악기 2천7백, 옹벽 1천5백 등

- 12월 말 1억6천4백 부채 발생(성도대출금 갚았을 때)

7) 관리집사 선임문제

◦ 3명 면접실시하였으나 임목사님의 제안에 손석규 장로 수락함

◦ 목사님 관리집사로 함께 하기가 편함(인터뷰)

- 현 근무지 보수가 많으나 새벽기도 등 영적 유익이 있어서 수락함.

◦ 서울로 이사할 경우 전세금 5천만원 필요

- 권인혁 전도사 지원하고자 했던 예산으로 활용가능

◦ 총부채 2억1천만원 정도 예상, 준공시 교회담보 대출로 자금 마련

◦ 6월부터 근무시작

◦ 운영위원 다른 의견여부 : 없음