건축위원회 회의록

□ 일시 : 5월 14일 오후 4시~5시

□ 장소 : 중대부중 운동장

□ 참석자 : 11명(불참 : 오인숙, 고상돈, 박영근, 윤호중, 이태수)

□ 토의내용

1) 설우건설 7월말까지 연장요청처리에 대한 건 : 조윤익

◦ 내용 : 설계변경, 콘크리트 공급 지체, 민원 등 문제를 들어 연장요청 공문 보냄

◦ 7월 15일까지 받아주자(실제로는 31일까지 마감) : 조계승

- 공정표 상에 7월 중순이므로 이것을 근거로 요청하는 것이 좋겠음

◦ 귀책사유를 왜 교회에게 돌리는가? : 한배선

- 설우에서 책임을 지도록 압박을 주어야 함

- 우리에게 전가시키고 있음

- 6월말까지 마무리하도록 내용증명을 보내야 함

- 심정적으로 대응할수록 어려워짐

◦ 7월 15일까지 요청하는 것이 좋겠음 : 유신웅

◦ 강남건설과 설우와의 문제인데 강하게 나갈 필요가 있음 : 김대희

- 잔금이 10억원 정도 되므로 압박할 수 있음

- 내용증명 보낼 경우 재판과정 예상함

- 이미 설우와 강남건설 내분으로 서울시 감사실 민원 제기상태임

- 행정처분 예상됨

◦ 내용증명 보내기전에 설우에 구두의견 전달 필요 : 목사님

◦ 감리업체의 의견은? : 최영석

- 의견이 없음

◦ 설우 부회장과 별도 면담이 있었음 : 김대희

- 사실 공문을 보내도록 요청하여 설우에서 공문이 온 것임

- 날짜 명기해서 공문을 보내어 압박할 필요있음

◦ 내용증명을 보내더라도 법적인 절차로 인식하지 않을 수 있으므로 상관없다고

생각함 : 구영서

◦ 결론 : 7월 중순까지 마무리하도록 하고(31일까지는 인정) 더 이상 공기연장이

어렵다는 내용으로 공문을 내용증명으로 보내자

2) 근처 빌라주민들 민원처리 관련

◦ 빌라민원 : 조망권, 사생활 침해

- 옥상 낮추고, 십자가 없애고 도로 복구하라

◦ 구청 민원회의 참석

- 현장소장, 감리 등

- 십자가 탑문제 등 구청에서는 따로 지시내용은 없었음

- 검토하겠다는 답변을 하였음

3) 기타 토의사항

◦ 찬양팀 - 강대상 신디, 드럼 배치문제 의견 수렴

◦ 의자 선정 : 2인석, 4인석 등 선정필요

- 공간 효율성을 검토하여 결정

◦ 사택 : 한샘가구로 주방, 붙박이장, 신발장 등 시공