건축위원회 회의록

□ 일시 : 9월 17일 오후 3시~4시30분

□ 장소 : 교회 사무실

□ 참석자 : 11명(불참자 : 이만기, 박영근, 이태수, 고상돈, 오인숙, 최영석),

손석규 장로

1) 건축진행 현황 : 조윤익 장로

◦ 공사 미진 부분

- 에어콘 실외기, 계단 윗부분 정리, 주차장 우레탄 등

◦ 준공접수 : 9/19(화)

- 1주일이내 특검 실시

2) 현재 설우의 문제점과 제안사항 설명 : 한배선 장로

◦ 설우의 문제점

① 인근식당 공사업체 식대 미지급 : 1,200만원

- 구의원, 구청에 민원제기

- 구청 담당자 특검에 연계하겠다는 발언을 했다가 취소함

② 강남건설 노동자 9,500만원 인건비 못받음 : 민노총에서 집회신고함

- 1억6천 공사대금 설우에서 못받음

- 일단 수요일까지 연기

※ 설우측 해결안 제시

- 교회에서 5,500만원+600만원을 설우로 지급한다면 해결해 보겠다고 함

◦ 건축위원 토의사항

- 당초 준공하면 1억을 주기로 했었으니 그 금액에서 주는 방안 (김대희)

- 집회와 민원을 해결하는 조건으로 지급하자

- 설우가 이미 하청업체와의 분쟁으로 1억6천 강남건설에 가압류, 재료비 9천

등 2억5천6백만원 가압류 잡혀 있음 (한배선)

- 준공후 1억을 주고 3억은 하자보수 등 이유로 2개월후 지급하기로 함 ‘              (김대희)

- 가압류 금액과 청구금액을 포함하면 남는 금액이 8천만원 정도로 하자이행

을 받을 수 있겠는가? (조계승)

- 식대 600만원과 5500만원 인건비로 지급하자 전체를 담보할 수 있는가?

해결한 결과문서를 가져오도록 해야함 (한배선)

- 해결한 내용을 확인해 오면 주는 조건으로 하자 (조계승)

- 설우는 빈독에 물붓기 상태임

남은 공사부분도 직불형태로 추진해야 하는 상황(확인서 받는 조건)

완강기도 안 붙이는 등 잔여 공사 많음

계속 끌려가는 구조가 될 수 있음 (김대희)

- 채무규모가 얼마인지 확인할 수 없음으로 이번에도 줄 필요가 있는가

(조계승)

- 준공부터 해결해야 함으로 준공에 관련된 것은 협조해야 함

체불임금으로 교회앞에서 데모하고 민원이 발생한다면 교회의 이미지는

실추되고 주위로부터 오해를 받음 (목사님)

- 식당 민원문제는 식당에서 승소함 : 1200만원 (조윤익)

구청에서는 민원 때문에 특검을 까다롭게 할 수 있다는 분위기를 조장함

- 해결방안 : 데모를 하지 않는 조건, 식당민원 해결하는 조건으로 6100만원을

지급하는 것이 좋겠음 (목사님)

- 가압류와 선금 주면 8천여만원 남은 것으로 향후 하자보수 등을 감당할 수

있겠는가? (조계승)

- 가압류중에서 일부 해결된 금액이 있음, 미지급금 9천만원도 손해계산까지

포함 금액이므로 실제 금액은 다른 금액임

가설재 비용도 1억이 되는지 확인해야 함 : 손율로 계산한 것임

계산이 다시 되어야하는 부분임 (조윤익)

- 최종의결 : 목사님의 의견대로 집행하기로 위원들 만장일치로 확인함

(유신웅)

◦ 기타 토의사항

- 지체상환금을 설우에게 물릴 것인가 (구영서)

현재로선 설우의 상태로 실익을 기대할 수 없음

2개월후 잔금을 지급하는 부분, 하자이행보증보험을 들도록 하였음 (김대희)

- 금일 지영집사가 교회 주차장에서 출차하다가 추락사고를 당함 (김대희)

보완대책 필요함 (편도선)